조달청 시설공사 관리업무 처리규정

1996.11.15제정

조달청훈령 제949호

개정 1999.04.27  조달청훈령 제 1024호

개정 1999.11.09  조달청훈령 제 1088호

개정 2006.12.12  조달청훈령 제 1371호

개정 2009.08.21  조달청훈령 제 1467호

개정 2011.11.28  조달청훈령 제 1529호

개정 2014.11.24  조달청훈령 제 1674호

개정 2015.06.01  조달청훈령 제 1696호

개정 2018.05.16  조달청훈령 제 1831호

제 1 장  총   칙

제1조(목적) 이 규정은 「조달사업에 관한 법률 시행령」(이하“영”이라 한다) 제9조의3제4항에 따른 시설공사 맞춤형서비스 관리와 기법 개발 및 소속 감독관 등의 복무에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①조달청이 수요기관의 시설공사 관리를 대행하는 시설공사 맞춤형서비스(이하 “맞춤형서비스”라 한다) 관리에 관한 업무처리는 따로 규정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

②맞춤형서비스 관리업무는 다음과 같다.

1. 맞춤형서비스 총괄

2. 맞춤형서비스 대상공사의 기획에 관한 사항

3. 맞춤형서비스 대상공사의 기타 기술용역 관리에 관한사항

4. 맞춤형서비스 대상공사의 설계용역 및 건설사업관리용역관리에 관한사항

5. 맞춤형서비스 대상공사의 시공관리업무

6. 맞춤형서비스 대상공사의 사후관리업무

7. 조달사업특별회계 시설공사의 집행

8. 기타 맞춤형서비스 대상공사의 관리에 부수되는 업무

9. 맞춤형서비스 품질향상을 위한 설계관리, 시공관리 기술 개발, 선진 기법 도입에 대한 업무

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “맞춤형서비스 관리”란 수요기관의 장이 맞춤형서비스를 요청하고 조달청장이 동의하여 상호 약정한 시설공사나 조달특별회계로 집행하는 시설공사에 대하여 기획·타당성조사·분석·설계·계약·시공·건설사업관리·평가·사후관리 등에 관한 관리업무의 전부 또는 일부를 수행하는 것을 말한다.

2. “맞춤형서비스 부분대행 관리”란 제1호의 각 단계 중 일부 단계에 해당하는 제2조 각 호에 따른 관리업무를 수행하는 것을 말한다.

3. “맞춤형서비스 일괄대행 관리”란 제2호의 전 단계에 걸쳐 제2조 제2항 제2호 내지 제9호에 따른 관리업무를 수행하는 것을 말한다.

4. “검사관”이란 조달청장 및 그 소속기관장을 대리하여 조달특별회계로 시행하는 공사나 수요기관의 장과 약정한 공사의 설계 및 시공 전반에 대해「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제14조와 계약조건에 따른 검사업무 및 관련 업무에 종사하는 자를 말한다.

5. “감독관" 이란 조달청장 및 그 소속기관장을 대리하여 조달특별회계로 시행하는 공사나 수요기관의 장과 약정한 공사의 설계 및 시공 전반에 대해「국가를 당사자로 하는 계약에 관한법률」제13조와 계약조건에 따른 감독업무 및 관련 업무에 종사하는 자를 말한다.

6. “공사관리관”이란 조달청장 및 그 소속기관장을 대리하여 조달특별회계로 시행하는 공사나 수요기관의 장과 맞춤형서비스로 약정한 공사 중 감독 권한대행 등 건설사업관리를 시행하는 공사에 대하여 「건설기술진흥법 시행령」제56조에 따른 관리업무에 종사하는 자를 말한다.

7. “건설사업관리”란 「건설기술 진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제39조에 따른 건설공사의 건설사업관리로서, 「건설기술 진흥법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제59조에 따른 업무를 수행하는 것을 말한다.

8. “감독권한대행 등 건설사업관리”란「건설기술진흥법」제39조제2항에 따라 건설사업관리용역업자가 시공단계의 건설사업관리와 발주청의 감독권한을 대행하는 것을 말하며, 해당 공사계약문서의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고 시공단계의 발주청 감독 권한대행 업무를 포함하여 건설사업관리  업무를 수행하는 것을 말한다.

9. “감리”란 건설공사가 관계 법령이나 기준, 설계도서 또는 그 밖의 관계 서류 등에 따라 적정하게 시행될 수 있도록 관리하거나 시공관리·품질관리·안전관리 등에 대한 기술지도를 하는 건설사업관리 업무를 말한다.

10. “건설사업관리용역업자”란 건설사업관리를 업으로 하고자「건설기술진흥법」제26조에 따라 건설공사에 대한 특별시장․광역시장․특별자치시장․도지사 또는 특별자치도지사에게 건설기술용역업자로 등록한 자를 말한다.

11. “건설사업관리기술자”란 법 제26조에 따른 건설사업관리용역업자에 소속되어 건설사업관리 업무를 수행하는 자를 말한다.

12. “책임건설사업관리기술자”란 발주청과 체결된 건설사업관리 용역계약에 의하여 건설사업관리용역업자를 대표하며 해당공사의 현장에 상주하면서 해당공사의 건설사업관리업무를 총괄하는 자를 말한다.

13. “계약상대자”란 정부와 설계용역, 건설사업관리용역 또는 공사계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

14. “설계관리원”이란 건축, 토목, 기계, 전기 등 전문공종별 설계도서의 기술검토, 품질확인 등을 전담하는 조달청 직원을 말한다.

15. “사후관리”란 조달청장이 공사관리하여 준공한 시설물에 대하여「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제61조에 따라 수요기관이 실시하여야 하는 하자검사를 원활히 할 수 있도록 준공 후 2년간 협력․지원하는 것을 말한다.

16. “소관부서”란 제2조제2항의 업무를 담당하는 시설사업기획과, 공사관리과, 서울지방조달청 공사관리과를 말한다.

제 2 장  시설공사 맞춤형서비스 관리

제 1 절  맞춤형서비스 약정체결 및 수수료

제4조(맞춤형서비스 요청서 접수) ①시설사업기획과장은 수요기관으로부터 제2조제2항 각호의 업무를 요청받은 경우에는 요청서에 다음 각 호의 근거서류가 구비되었는지 확인하여야 한다. 단, 구비서류 등의 경미한 보완이 필요한 경우에는 요청서 수락이후 수요기관에 보완을 요청할 수 있다.

1. 맞춤형서비스 약정체결에 따른 업무분담 범위

2. 사업계획서(부지현황, 사업기간, 주요 시설계획, 사업 추진경과 등 포함)

3. 부지매입비, 시설비, 시설부대경비 등 총사업비가 명시된 예산관계 서류

4. 기타 시설사업기획과장이 사업 수행에 필요하다고 인정하는 자료

②시설사업기획과장은 수요기관으로부터 제1항의 요청서 및 근거서류가 접수된 경우에는 내부정보화시스템(EDI)에 기재토록 하여야 한다.

제5조(요청서 수락) ①시설사업기획과장은 제4조에 따라 접수한 요청서에 대하여 공사규모 및 소관부서 업무량, 수임조건 등을 검토하여 수락여부를 결정하여야 한다.

②시설사업기획과장은 제4조의 수요기관 요청서에 따른 관리업무가 제2조제2항 6호(시공관리 업무) 및 7호(사후관리 업무)를 포함하는 경우로서 제6조제1항의 반려사유에 해당되는 공사를 수임하고자 하는 경우에는 사전에 소관부서의장과 협의하여 결정하여야 한다.

③제1항 내지 제2항에 따라 수락여부 결정이 곤란 하거나 예외적으로 적용할 필요가 있는 경우에는 시설업무심의회 심의를 거쳐 수락 여부를 결정한다.

제6조(요청서 반려) ①시설사업기획과장은 제5조제1항의 요청서를 검토한 결과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이를 수요기관에 반려할 수 있다.

1. 총공사 금액이 100억원 미만인 공사

2. 시공상 특수기술을 요하는 공사

3. 유사 사례와 비교해 사업비 및 공사기간이 부족해 공사품질 확보가 곤란하다고 판단되는 공사

4. 제4조제1항 2호 또는 3호의 근거자료가 미비해 사업비 및 사업기간의 적정성 판단이 곤란하다고 판단되는 공사

5. 기타 업무수행이 곤란하다고 인정되는 공사

②시설사업기획과장은 요청서가 제1항 제5호에 해당하는지 여부를 판단하기 위하여 소관부서의 장과 협의하여 소관부서 업무량에 따른 수임기준을 별도로 정하여 운영할 수 있다.

③시설사업기획과장은 제1항에 따라 요청서를 반려하였을 경우에는 제4조제2항의 내부정보화시스템(EDI)에 반려한 사유를 기재한다.

제7조(약정체결 등) ①시설사업기획과장은 제5조제1항에 따라 맞춤형서비스 관리 요청을 수락하고자 할 경우에는 다음 각 호의 해당 약정서 2부를 작성한 후 수요기관이 요청한 업무 범위에 따라 맞춤형서비스 약정 일반조건을 첨부 하고 청장직인을 날인하여 수요기관에 송부한다. 이 경우, 약정 일반조건 내용의 일부 조정 또는 특기사항을 명시할 필요가 있는 경우에는 수요기관과 협의하여 정하고 내부정보화시스템(EDI)에 기록하여야 한다. 단, 전자행정시스템이 구축되어 있는 수요기관은 약정동의 공문서 교환으로 약정체결 절차를 갈음한다.

1. 시설공사 맞춤형서비스 일괄대행

2. 시설공사 맞춤형서비스 부분대행

②제1항에 따른 약정은 수요기관의 장이 약정서에 날인통보하거나 수요기관의 장이 조달청장이 발송한 약정서에 대한 동의 의사를 명시하여 공문으로 회신함으로써 체결된다.

③제2항의 약정이 체결된 경우에는 내부정보화시스템(EDI)에 기록하고 약정번호를 연도별 누계번호로 부여한다.

제7조의2(맞춤형서비스 수수료 등)①소관부서장은 관리업무 완료 시 맞춤형서비스 수수료를 전산입력 후 동 내용을 수요기관에 통보한다.

②장기계속공사에 대한 시설공사관리 수수료는 당해년도 계약분에 대한 금액을 기준으로 하되, 수요기관과 협의된 경우에는 총계약분에 대하여 일괄 징수 할 수 있다.

③수수료 요율은 계약 건별로 공사예산액을 기준으로 산출한다.

④설계변경 등 계약내용변경으로 인하여 계약금액 및 관급자재 금액의 합계액이 시설공사관리 수수료 산출 당시의 공사예산액에 비하여 5/100이상 증가한 경우에는 당초 시설공사 관리수수료율에 동 증가금액을 곱한 금액을 추가 징수 의뢰한다. 다만, 수요기관의 예산사정상 징수가 곤란한 경우에는 별도 협의할 수 있다.

⑤.소관부서장이 제1항부터 제4항에 따라 맞춤형서비스 수수료를 징수 의뢰하는 경우에는 그 금액 및 내용을 맞춤형서비스 수수료 대장(별지 제15호 서식)에 기재한다.

⑥제1항부터 제5항에 따른 맞춤형서비스 수수료는 예산사정 등으로 인한 수요기관의 요청에 따라 선납 또는 분할 징수 의뢰할 수 있다.

제8조(맞춤형서비스 관계서류) ①시설사업기획과장은 제7조제1항 1호의 약정을 체결한 경우 다음 각 호의 자료를 제출받아 업무에 필요한 조치를 취할 수 있다.

1. 제4조제1항 각 호에서 정한 서류의 보완자료

2. 기타 사업 수행에 필요한 기본자료

②제7조제1항 2호의 약정을 체결한 경우에는 제9조제2항의 업무 범위에 따라 제1항의 자료를 포함하여 다음 각 호의 필요한 자료를 제출받아 업무에 필요한 조치를 취할 수 있다.

1. 시설공사 도급계약서

2. 설계도서(설계도면,시방서,산출내역서,물량산출서,구조계산서, 설비용량계산서 등)

3. 현장설명서

4. 공정표

5. 기타 감리.감독 및 검사에 관련되는 서류

제 2 절  시설공사관리 및 사업수행

제9조(사업수행) ①시설사업기획과장은 약정을 체결한 공사에 대하여 본 조 각 항에 따른다. 다만, 약정서에서 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

②일괄대행 관리 약정을 체결한 경우 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 사업추진계획서 작성

2. 사업수행에 필요한 각종 기술용역 발주 방법, 용역과업내용서, 용역 산출내역서 등 작성 및 검토

3. 각종 기술용역 감독 및 검사

4. 설계용역 발주 방법, 설계용역과업내용서, 설계용역 대가 산출내역서 등 작성 및 검토

5. 설계용역 감독 및 검사

6. 감리용역 발주 방법, 감리용역과업내용서, 감리용역 대가 산출내역서 등 작성 및 검토

7. 공사 발주 방법, 현장설명서 작성 및 설계도서 등 검토

8. 공사관리. 감독 및 검사(사후관리 포함)

9. 기타 사업에 필요한 법령 등 검토

③부분대행 관리 약정을 체결한 경우 약정서의 업무범위에 따라 제1항의 업무 중 필요한 업무를 다음 각 호에 따라 수행한다.

1. ‘기획관리 업무’: 제1항 1호 및 2호, 3호, 9호의 업무 또는 조달청 기술자문위원회의 각종 심의에 관한 업무

2. ‘설계관리 업무’: 제1항 제4호, 제5호, 제6호, 제7호 및 제9호의 업무 또는 조달청 기술자문위원회의 각종 심의에 관한 업무

3. ‘심의대행 업무’: 제1항 제1호, 제4호 및 제9호의 업무 및 조달청 기술자문위원회의 각종 심의에 관한 업무

4. ‘시공관리 업무’: 제1항 제8호, 제9호의 업무. 다만, 공사발주 단계의 설계도서 등 검토는 포함하지 아니한다.

제10조(소관부서 협의 및 이관) ①시설사업기획과장은 소관부서장과 협의하여 제9조제1항 및 제2항에 따른 업무를 이관할 수 있다.

②시설사업기획과장은 수요기관과 제9조제3항제4호의 부분대행 약정을 체결한 경우에는 공사관리과장에게 제9조제2항제8호와 제9호의 업무를 이관하여 수행하도록 하여야 한다. 다만, 서울․인천․경기․강원 지역의 공사에 대한 제9조제2항제2호에서 제9호까지의 업무를 서울지방조달청 공사관리과장에게 이관할 수 있다.

③시설사업기획과장은 소관부서에 업무이관 시 제9조의 업무범위에 따라 각 소관부서장에게 다음 각 호의 관계서류를 인계하여야 한다.

1. 사업추진계획서, 약정서

2. 공종별 설계서(설계도면, 수량산출서, 물량내역서, 시방서, 각종 계산서 등)

3. 공고서, 현장설명서 등 계약관련 서류

4. 기타 감독 및 검사에 필요한 서류

제11조(업무협조 등) ①시설사업기획과장은 맞춤형서비스의 업무범위 등 관련 제도를 총괄 조정하며 신규 제도를 수립하는 경우 사전 통보하여 소관부서장의 의견이 반영될 수 있도록 하여야 한다.

②시설사업기획과장은 소관부서장에 사업추진 현황, 관리대장 등 맞춤형서비스 관련 자료를 요구할 수 있으며 각 소관부서장은 그에 협조하여야 한다.

③시설사업기획과장은 적정한 공사기간 및 공정계획의 수립 등 시공품질 향상을 위해 제9조 제1항 5호의 설계용역 감독을 위한 업무와 6호 및 7호의 업무에 대하여 소관부서장의 협조를 요청할 수 있다.

제12조(맞춤형서비스 확대) ①시설사업기획과장은 맞춤형서비스 확대를 위해 다음 각 호의 마케팅 활동을 할 수 있다. 다만, 과도한 맞춤형서비스 확대로 서비스 품질 확보가 곤란하다고 판단할 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인쇄물, 동영상, 전자 게시판 등을 통한 홍보

2. 수요기관 설문조사

3. 마케팅 대상 공사에 대한 사전 컨설팅 제공

4. 수요기관 설명회 개최

5. 기타 수요조사 및 홍보를 위해 필요한 활동

②소관부서장은 시설사업기획과장이 제1항의 맞춤형서비스 마케팅활동을 위한 지원을 요청할 경우에는 특별한 사유가 없는 한 협조하여야 한다.

제13조(맞춤형서비스 품질향상) ①시설사업기획과장은 맞춤형서비스 제공으로 타당한 공사계획, 설계오류 최소화, 시공품질 확보를 위해 다음 각 호의 품질향상 활동을 할 수 있다.

1. 디지털 건설정보모델링 등 선진 건설기법의 맞춤형서비스 도입과 발전

2. 설계 및 시공 평가기준의 개발 및 평가

3. 수요기관 및 계약상대자의 맞춤형서비스 만족도 조사

4. 맞춤형서비스의 일부 업무에 대한 민간 전문가 활용

5. 기타 시설사업기획과장이 필요하다고 인정하는 사항

제14조(도서 등의 관리) ①시설사업기획과장 및 소관부서장은 맞춤형서비스 관리 중 취득한 도서, 보고서 등 각종 자료를 약정 종료 후 다음 각 호의 기간 동안 보관해야 한다. 다만, 보관이 곤란한 설계도서 등 인쇄물은 제2호에 따라 동일한 내용이 수록된 전자파일로 보관하고 약정 종료 시 수요기관에 반환하도록 할 수 있다.

1. 설계도서 등 인쇄물: 5년

2. 각종 전자파일: 5년

②감독관 및 설계 관리원은 지정받은 맞춤형서비스 관리 대상공사의 각종 자료를 제1항에 따라 보존하고 제1항제2호의 전자파일은 CD로 시설사업기획과장 또는 소관부서장이 지정한 자료관리 담당자에게 제출하여야 한다.

제14조의 2(기록유지 및 통계) 소관부서장은 다음 통계표를 작성 유지하여야 한다.

1. 공사관리 추진 상황

2. 연도별 일괄대행관리,부분대행관리 수임실적

3. 연도별 시설공사관리 수수료 징수실적

4. 준공된 공사현황

5. 연도별 반려 공사현황

제 3 장 기획 및 설계단계 관리

제 1 절  시설공사의 기획

제15조(검사관, 감독관 및 관리원의 지정 등) ①시설사업기획과장은 제9조제1항의 일괄대행 관리 약정을 체결하거나 제9조제2항의 부분대행 관리 약정을 체결할 때에는 맞춤형서비스 관리를 위해 검사관과 감독관을 임명해야 한다.

②시설사업기획과장 또는 소관부서장은 검사관 및 감독관을 지원하기 위해 건축·토목·조경·기계·전기·통신 등 전문분야의 설계 관리원을 지정할 수 있다.

제15조의 2(검사관의 임무) 제15조제1항에서 시설사업기획과장이 임명한 검사관은 지정받은 맞춤형서비스 관리대상 공사에 관하여 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 기획단계 및 설계단계 업무 총괄

2. 기술용역의 선금 및 기성금 지급 적정성 확인

3. 기술용역 검사 및 그와 관련한 사항

4. 감독관 및 설계 관리원 복무관리

5. 기술자문위원회의 각종 심의에서 간사의 임무

6. 관급자재심의위원회에서 간사의 임무

7. 기타 시설사업기획과장이 필요하다고 인정한 사항

제15조의 3(감독관의 임무) 제15조제1항에서 시설사업기획과장이 임명한 감독관은 지정받은 맞춤형서비스 관리대상 공사에 관하여 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 사업추진계획서 작성

2. 기술용역 발주 및 그와 관련한 사항

3. 기술용역의 선금 및 기성금의 지급 검토

4. 기술용역 계약관리 및 그와 관련한 사항

5. 기술용역 감독 및 그와 관련한 사항

6. 기술자문위원회의 각종 심의의 준비 및 운영

7. 관급자재심의위원회의 심의 준비 및 분리발주 여부 확인

8. 기타 시설사업기획과장이 필요하다고 인정한 사항

제15조의 4(설계 관리원의 임무) 제15조제2항에서 시설사업기획과장이 임명한 설계 관리원은 지정받은 맞춤형서비스 관리대상 공사에 관하여 다음 각 호의 임무를 수행한다. 다만, 각 호의 임무 중 일부 또는 전부를 대신할 외부 전문가를 채용할 경우에는 해당하는 임무를 제외할 수 있다.

1. 전문 분야의 설계에 반영할 공법 및 자재선정 검토

2. 계약상대자가 제출한 전문 분야의 공사비 내역서 검토

3. 계약상대자가 제출한 전문 분야의 계산서 등 검토

4. 계약상대자가 제출한 전문 분야의 설계 단계별 체크리스트 검토

5. 계약상대자가 제출한 설계도서의 품질 검토

6. 기타 감독관이 협조 요청한 전문분야 기술검토에 관한 사항

7. 기술자문위원회의 각종 심의에 대한 지원업무

8. 관급자재심의위원회의 심의에 대한 지원업무

9. 기타 시설사업기획과장이 필요하다고 인정한 사항

제16조(사업추진계획의 작성) ①감독관은 수요기관과 약정체결시 다음 각 호에 따라 사업추진계획서를 작성하여야 한다.

1. 사업추진계획서는 맞춤형서비스 약정서에서 정한 권리·의무의 범위를 임의로 조정할 수 없다. 다만, 구체적 사안을 정할 때에는 약정서의 범위 내에서 따로 정할 수 있다.

2. 사업추진계획서는 다음 각 목의 검토를 포함하여야 한다. 다만, 약정서, 사업 추진경과, 발주 방법, 공사 특성에 따라 필요한 경우 가목의 검토는 제외할 수 있다.

가. 관련법규

나. 사업비 예산(조사비, 설계비, 감리비, 공사비, 시설부대비 등)

다. 사업기간(각종 기술용역 추진일정, 설계용역 추진일정, 각종 심의일정, 공사 추진일정 등)

라. 수요기관 및 조달청의 세부 역할분담

②제1항에 따라 작성한 사업추진계획서는 국가 주요시책, 관련 법령의 변경, 계약방법 변경, 수요기관 예산사정 등 특별한 경우를 제외하고는 변경하지 않음을 원칙으로 한다.

제17조(기술용역의 계약요청 등)①감독관은 제16조의 사업추진계획서에서 명시한 추진일정에 따라 다음 각 호의 기술용역을 계약요청하여야 한다. 다만, 수요기관 사업계획 변경, 관련법규 제․개정 등에 따라 기술용역 수행이 불필요한 경우는 그러하지 아니한다.

1. 기본계획 수립 및 타당성조사 용역

2. 입찰안내서 작성 용역

3. 도시계획시설 결정․변경 용역

4. 환경영향평가, 교통영향분석 및 개선대책 용역 등 각종 영향평가 용역

5. 문화재지표조사 등 학술연구용역

6. 기본 및 실시설계 용역

7. 특수시설, 전시시설 등의 설계용역

8. 설계의 경제성 검토(설계VE:가치공학value engineering) 용역

9. 감리용역 또는 건설사업관리(CM) 용역

10 기타 시설사업기획과장이 필요하다고 인정하는 기술용역 또는 일반용역

②감독관은 제1항의 각 종 기술용역 계약요청을 할 때에는 과업내용을 충실히 작성하여 계약상대자가 효율적으로 용역을 수행할 수 있도록 하여야 한다.

③감독관은 각 종 기술용역 과업내용을 작성할 때에는 수요기관과 협의하여야 하며 전문분야의 기술적 검토가 필요하다고 판단할 경우에는 해당하는 전문분야의 설계 관리원에 협조 요청할 수 있다.

④시설사업기획과장은 기술용역의 계약요청에 관한 사항을 계약담당부서에 사전 통보하고 협조 요청할 수 있다.

제 2 절 기술용역 관리

제18조(기술용역의 착수계 승인) ①감독관은 계약조건, 과업지시서, 제안서 등에 따라 계약상대자가 제출한 착수계를 ‘착수계 승인 검토서’(별지 18호 서식)에 따라 확인 및 승인하여 수요기관에 통보하여야 한다. 다만, 필요한 경우 수요기관과 협의하여 승인할 수 있다.

②감독관은 착수계 미비로 기술용역 수행이 곤란하다고 판단할 경우에는 계약상대자에 신속한 보완제출을 요구하여야 한다.

③감독관은 제1항에 따른 확인 및 승인 시 설계 관리원에 협조를 요청할 수 있다.

제19조(하도급 검토)①감독관은 계약조건, 과업지시서, 제안서 등에 따라 계약상대자가 제출한 하도급 계획서를 ‘하도급 승인 검토서’(별지 19호 서식)에 따라 확인 및 검토하여 수요기관에 통보하여야 한다.

②감독관은 하도급 계획서 미비로 기술용역 수행이 곤란하다고 판단할 경우에는 계약상대자에 신속한 보완제출을 요구해야 한다.

제20조(선금 지급 검토)①감독관은 계약상대자의 선금지급 요청이 있는 경우에는 관련법령 및 계약예규에 따라 계약조건, 기성금 지급 여부 및 지급금액, 선금 지급보증 유무 등을 확인 및 검토하여 수요기관에 통보하여야 한다.

②감독관은 계약상대자의 선금 지급 검토를 할 때에는 제19조제1항의 하도급 계획서에 기재된 하도금자에 선금이 지급될 수 있도록 계약예규 및 계약조건에 따른 조치사항을 계약상대자 및 수요기관에 안내하여야 하며 선금의 하도급 대금 지급 여부를 확인하기 위해 계약상대자로 하여금 다음 각 호의 서류를 제출토록 할 수 있다.

1. 하도급 계약서

2. 하도급 대금 입금내역을 확인할 수 있는 하도급자 통장계좌 사본

3. 기타 하도급 대금 지급 여부를 확인할 수 있는 서류

제21조(기성금 지급 검토) ①감독관은 계약상대자의 기성금 지급 요청이 있는 경우에는 기성금 요청내역, 계약조건, 선금 지급여부 및 사용실적, 과업수행 일정 등을 확인하여 기성검사를 실시하고 수요기관에 통보하여야 한다.

②감독관은 계약상대자가 요구한 기성금의 적정성을 판단할 때에는 다음 각 호를 준용할 수 있다.

1. 공공발주사업에 대한 건축사업무범위 및 대가기준

2. 계약상대자가 수행한 용역일정 및 과업내용에 따라 납품한 도서 등의 검사 결과

③감독관은 계약상대자의 기성검사 결과를 수요기관에 통보할 때에는 제19조제1항의 하도급 계획서에 기재된 하도급자에 기성금이 지급될 수 있도록 계약예규 및 계약조건에 따른 조치사항을 계약상대자 및 수요기관에 안내하여야 하며 기성금의 하도급 대금 지급 여부를 확인하기 위해 계약상대자로 하여금 다음 각 호의 서류를 제출토록 할 수 있다.

1. 하도급 계약서

2. 하도급 대금 입금내역을 확인할 수 있는 하도급자 통장계좌 사본

3. 기타 하도급 대금 지급 여부를 확인할 수 있는 서류

제22조(기술용역의 일시정지) ①감독관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 계약조건 및 계약예규 등에 따라 기술용역을 일시 정지할 수 있다.

1. 수요기관의 의사결정 지연으로 계약상대자의 과업수행이 곤란한 경우. 다만, 계약상대자의 귀책있는 사유에 의한 경우는 제외한다.

2. 각 종 심의 및 인증, 인·허가 일정의 지연으로 계약상대자의 과업수행이 곤란한 경우. 다만, 계약상대자의 귀책있는 사유에 의한 경우는 제외한다.

3. 선행되어야 할 다른 기술용역의 일정지연에 따라 계약상대자의 과업수행이 곤란한 경우. 다만, 계약상대자의 귀책있는 사유에 의한 경우는 제외한다.

4. 총사업비 조정 협의 지연으로 계약상대자의 과업수행이 곤란한 경우. 다만, 계약상대자의 귀책있는 사유에 의한 경우는 제외한다.

②감독관은 제1항에 따라 계약상대자의 용역 일시정지 요청을 승인할 때에는 계약상대자로 하여금 수정한 과업 수행일정을 첨부토록 하여야 한다.

제23조(기술자 배치의 변경) ①감독관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 계약상대자가 제출한 사유서, 기술자 배치계획 등을 검토하여 필요한 경우에는 기술자 배치를 변경하고 이를 수요기관 및 계약담당공무원에 통보하여야 한다.

1. 수시보고, 주간보고, 월간보고, 제27조제1항의 체크리스트를 누락하거나 형식적으로 작성 및 제출할 경우

2. 용역수행 일정이 10분의 3 이상 지연된 경우

3. 계획·기본설계 각 단계에서 추정한 설계금액(공사비)이 공사비 예산을 5분의 1 이상 초과하는 경우

4. 정당한 사유없이 감독관의 지시에 따르지 않는 경우

5. 계약상대자의 기술자 배치 변경 요청이 있는 경우

6. 기타 시설사업기획과장이 필요하다고 인정하는 경우

②감독관은 제1항의 기술자 배치를 변경할 경우에는 계약상대자가 제출한 변경 기술자의 자격요건 등을 확인 및 검토하고 승인하여야 한다.

제24조(기술용역 계약변경 요청에 대한 검토 등) ①감독관은 계약상대자로부터 용역계약 변경에 대한 요구가 있는 경우 그 적정성을 검토하여 수요기관에 통보하여야 한다.

②감독관은 계약상대자로부터 용역기간 조정에 대한 요구가 있는 경우에는 다음 각 호에 따라 검토하여야 한다.

1. 사업추진계획서 상의 추진일정

2. 계약상대자가 제출 및 승인받은 착수계 및 용역수행 일정

3. 용역의 일시정지 사유 및 그에 따른 용역기간

4. 계약상대자가 납품한 각종 보고서 및 설계도서와 그 납품 시기

5. 기타 수요기관 의견

③감독관은 계약상대자로부터 용역 계약금액 조정에 대한 요구가 있는 경우에는 다음 각 호에 따라 검토하여야 한다.

1. 과업의 추가 또는 삭제 및 감소 여부

2. 수요기관이 기 승인한 설계에 대한 재설계 여부. 다만, 재설계 여부의 판단에 대한 기준은 시설사업기획과장이 따로 정할 수 있으며 수요기관의 의사가 확정되지 않아 발생한 경미한 변경에 따른 일부 재설계는 제외한다.

3. 기타 수요기관 의견 및 예산사정

제25조(기술용역의 감독 및 검사) ①시설사업기획과장은 약정을 체결한 공사의 각종 기술용역에 대해 검사관 및 감독관, 설계 관리원으로 하여금 수시 감독토록 하고 계약상대자가 최종 납품도서 및 성과품 등의 검사를 요청할 때에는 검사관 및 감독관이 검사하도록 하여야 한다.

②시설사업기획과장은 각종 기술용역에 대한 검사가 완료되면 검사관 및 감독관으로 하여금 검사조서(별지 제4호 서식)를 작성하여 수요기관에 송부토록 하고, 감독관으로 하여금 설계용역 발주, 대형공사 발주 등 필요한 조치를 취하도록 해야 한다.

③감독관은 제18조부터 제24조의 검토 및 확인 업무에 대하여 설계감리자 또는 건설사업관리자가 검토하도록 지시하고 그 결과를 검토하여 승인 또는 수요기관에 통보할 수 있다.

제 3 절 설계용역 관리

제26조(설계용역의 관리) 이 절에서 특별히 정하지 않은 설계용역의 관리에 관한 사항은 제18조부터 제24조, 제25조제3항을 준용한다.

제27조(단계별 설계관리 기준 등) ①시설사업기획과장은 맞춤형서비스 관리 대상공사의 효과적인 계획, 중간, 실시설계 등 각 단계별 설계관리 지침과 체크리스트를 마련하여 감독관 및 설계 관리원이 각 단계의 설계관리 및 검토 등에 활용토록 하여야 한다.

②감독관은 제1항의 체크리스트를 계약상대자가 설계 용역수행 일정에 따라 충실히 작성 및 제출토록 지시하여야 하며 설계 관리원이 계약상대자로부터 체크리스트를 제출받아 충분히 검토할 수 있도록 조치하여야 한다.

③설계 관리원은 제2항에 따라 계약상대자가 제출한 체크리스트를 다음 각 호를 기준으로 검토하고 그 의견을 수요기관에 통보하여야 하며 필요한 경우 감독관에게 협조 요청할 수 있다.

1. 설계용역 과업내용

2. 체크리스트 각 항의 작성 내용

3. 체크리스트 각 항의 작성 내용에 따른 추가 자료

4. 기타 관련법규에서 정한 설계요건

④감독관 및 설계 관리원은 계약상대자가 계획․기본․실시 설계도서를 납품한 때에는 설계도서의 적정성을 다음 각 호를 기준으로 검토 및 확인한 설계 검토서를 작성하여 수요기관 및 계약상대자에 통보하고 계약상대자의 조치결과를 확인하여 수요기관에 승인 요청하여야 한다.

1. 설계용역 과업내용

2. 전문분야별 설계도서(도면, 내역서, 시방서, 각종 계산서 및 보고서 등)

3. 기타 관련법규에서 정한 설계요건

⑤ 제4항의 설계검토서 작성 시 설계품질 향상을 위하여 외부 전문가의 자문의견을 반영할 수 있다.

⑥감독관은 제4항의 실시 설계도서 검토결과 설계금액이 예산을 초과한- 경우에는 계약상대자에게 설계금액 조정방안을 제출토록 요구하고 조정방안에 따라 설계금액을 조정토록 하여야 한다.

⑦감독관은 제9조제1항 및 제2항 제4호의 약정을 체결한 공사에 대해 제5항에 따라 조정한 설계금액이 불가피하게 예산을 초과할 경우에는 수요기관과 예산확보 방안을 협의하여야 한다.

제28조(설계용역의 감독 및 검사) ①시설사업기획과장은 약정을 체결한 공사의 설계용역에 대해 검사관 및 감독관, 설계 관리원으로 하여금 과업내용 및 계약조건, 관련법규에서 정한 설계조건 및 수요기관 요구조건 등에 따라 계약상대자를 수시로 지도 및 감독하게 하여야 한다.

②시설사업기획과장은 계약상대자가 최종 설계도서 등 성과품의 검사를 요청한 때에는 검사관 및 감독관으로 하여금 계약상대자가 제출한 최종 설계도서(설계도면, 공사시방서, 물량내역서 등)의 불분명, 오류, 누락, 상호모순 여부 및 설계용역 과업내용서, 기타 계약내용 등 이행 여부를 검사토록 하고 검사조서(별지 제4호 서식)를 작성하여 수요기관에 송부토록 하여야 한다.

③시설사업기획과장은 설계용역의 검사가 완료된 경우에는 감독관으로 하여금 공사발주에 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

④감독관은 제2항에 따른 검사를 위해 사전확인 및 검토를 설계감리자 또는 건설사업관리자가 검토하도록 지시하고 그 결과를 검토하여 승인 또는 수요기관에 통보할 수 있다.

제29조(평가자료의 작성 등) ①시설사업기획과장은 제70조 각 항의 평가 및 부실측정을 실시할 수 있도록 기획․설계 단계의 평가 관련자료를 작성하여 소관부서장에게 통보할 수 있다.

②소관부서장은 제1항에 따라 통보받은 자료를 바탕으로 평가해야 하며 제73조제1항 각 호에 해당하는 평가 관련자료 및 평가결과를 시설사업기획과장에게 통보하여야 한다.

제30조(사업관리 기록 유지) 감독관은 맞춤형서비스 관리 대상공사의 진행 현황을 파악하기 쉽도록 내부정보화시스템(EDI)을 활용하여 각종 사업정보를 기록 및 유지관리 하여야 한다.

제 4 장 시공단계

제 1 절 시공단계 건설사업관리용역 관리

제31조(감독관 또는 공사관리관 임명)①소관부서장은 제7조 에 따른 약정을 체결한 후 시설사업기획과장으로부터 시공관리 요청서류가 접수되면 해당공사에 대한 감독관 또는 공사관리관을 임명하고 그 명단을 수요기관에 통보한다. 감독관 또는 공사관리관을 교체하는 경우에도 또한 같다.

②복합공종의 경우에는 공종별로 감독관을 임명하는 것을 원칙으로 하며, 이 경우 주공종 감독관 또는 선임 감독관이 공사현장의 전반적인 공사관리 업무를 종합 조정토록 한다.

③단위공사에 동일 공종의 감독관을 2인 이상 임명하는 경우에는 주 감독관을 지정하여 임명할 수 있다.

제32조(건설사업관리용역의 감독 및 검사) ①소관부서장은 감리 및 건설사업관리 용역계약이 체결되면 해당공종에 대한 감독관 또는 공사관리관을 임명하고 약정조건에 따라 건설사업관리 용역을 수시 지도, 감독하게 하여야 한다.

②용역자가 용역을 완료한 후 용역 성과품의 검사를 소관부서장에게 요청하여 왔을 경우에는 용역검사자를 임명하여 검사토록하고 성과품 중 1부를 수요기관에 송부한다.

③용역검사자는 수요기관의 의견이 있을 경우에 이를 반영하여 용역을 검사하고, 보완사항이 있으면 당해 용역자에게 보완작업을 지시하여 재검사를 요청토록 할 수 있다.

④소관부서장은 제2항 및 제3항에 따라 검사가 완료된 경우에는 용역검사조서(별지 제4호 서식)를 작성하여 수요기관에 송부한다.

⑤소관부서장은 수요기관에서 건설사업관리 및 건설사업관리 용역계약을 체결하고 감리 성과품에 대한 검토를 요청하는 경우에는 제2항 및 제3항을 준용하여 감리 성과품을 검토할 수 있다.

제33조(건설사업관리 용역에 대한 감독관 또는 공사관리관의 업무범위) ①소관부서장은 용역계약 문서에 규정된 바에 따라 감독관 또는 공사관리관으로 하여금 책임건설사업관리기술자를 지도ㆍ감독하게 하여야 한다.

②감독관 또는 공사관리관은 공사의 수행에 따른 업무연락 및 문제점 파악, 민원해결에 대한 지원 및 의사결정, 용지보상 지원업무, 감리원의 지도․감독 업무등을 수행하여야 하며 계약상대자에게 직접 지시한 경우에는 책임건설사업관리기술자에게 그 내용을 통보하여야 한다.

③감독관 또는 공사관리관은 관계법령에서 별도로 정하는 사항 및 용역계약일반조건에서 정하는 발주기관의 기본업무 외에는 정당한 사유없이 건설사업관리기술자의 업무에 개입 또는 간섭하거나 건설사업관리기술자의 권한을 침해할 수 없다.

④공사관리관은 공사를 추진함에 있어 다음 각 호의 주요업무를 수행하여야 한다.

1. 보상 담당부서에서 수행하는 통상적인 보상업무 외에 건설사업관리기술자 및 시공자와 협조하여 용지측량, 기공승락, 지장물 이설 확인 등의 용지보상 지원업무수행

2. 건설사업관리기술자에 대한 지도․점검(근태사항 등)

3. 건설사업관리기술자가 수행할 수 없는 공사와 관련한 각종 관․민원업무 및 인․허가 업무를 해결하고, 특히 지역성 민원해결을 위한 합동조사, 공청회 개최 등을 추진

4. 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생시 발주청으로부터 검토․지시가 있을 경우 현지확인 및 검토․보고

5. 공사관계자 회의 등에 참석, 발주청의 지시사항 전달 및 공사 수행상 문제점 파악․보고

6. 품질관리 및 안전관리에 관한 지도

7. 예비준공검사 입회

8. 기성･준공검사 입회

9. 준공도서 등의 인수

10. 하자발생시 현지조사 및 사후조치

⑤감독관은 공사를 추진함에 있어 다음 각 호의 주요 업무를 수행하여야 한다.

1. 감리업무수행계획서, 감리원 배치계획서 등의 검토

2. 감리원 지도ㆍ점검(근태사항 등)

3. 설계변경, 공기연장 등 주요사항 발생시 현장 확인 및 검토ㆍ보고

4. 공사관계자 회의 등에 참석, 발주청 지시사항 전달 및 공사 수행상 문제점 파악ㆍ보고

5. 공사의 감독조서 작성 등

6. 품질관리 및 안전관리에 대한 지도

7. 시공 및 감리용역 평가 주관

8. 준공도서 등의 인계

9. 사후관리

⑥소관부서장은 건설사업관리기술자가 발주청의 지시를 위반하거나 법령 및 규정 등을 위반하여 업무를 수행할 경우에는 이에 대하여 해명하도록 하고 시정지시 또는 관련 법령에 따라 조치할 수 있다.

제33조의 2 삭제<2014.11.24.>

제 2 절  시설공사감독 및 검사

제34조(총괄관리자 임명) 소관부서장은 공사관리를 총괄하고 수요기관과 업무협의 등 공사 추진에 따른 행정업무와 공사 진행을 종합적으로 조정할 총괄관리자를 4급 또는 5급 공무원 중에서 임명한다.

제35조(공종별 감독업무 지도감독) 소관부서장은 소속 4급 또는 5급 공무원으로 하여금 해당 공종에 대한 시공관리 업무를 지도 감독하도록 하여야 한다.

제36조(감독관 또는 공사관리관의 임무) ①감독관 또는 공사관리관은 제5장의 “감독관 및 공사관리관 복무”규정에 따라 업무를 수행한다.

제37조(업무보고) ①감독관 또는 공사관리관은 다음 각 호의 사항에 대하여 공사진행 상황을 매일 파악하여 주 1회 주간업무 보고서(별지 제6호 서식)를 작성하여 소관부서장에게 보고한다.

1. 공정률

2. 주요부분 진행 현황

3. 면담자 및 처리 내용

4. 조치 및 특이사항

5. 업무처리 계획

②제1항의 주간업무 보고서로 감독관 또는 공사관리관의 업무수행 기록부를 대신할 수 있다.

③소관부서장은 건설사업관리용역업자를 통하여 매월 1회 공사진행 상황을 수요기관의 장에게 통지한다. 다만, 수요기관과 체결한 약정서에 특별히 정한 경우에는 그에 따른다.

제38조(검사관의 임명) ①소관부서장은 계약상대자로부터 계약의 전부 또는 일부의 이행 완료를 통지받은 때에는 검사관을 임명하여야 한다. 다만 감독 권한대행 등 건설사업관리용역을 시행하는 공사에 있어서는 당해공사의 건설사업관리용역업자가 건설사업관리기술자를 지정하여 필요한 검사를 수행하게 하여야 한다.

②소관부서장은 제1항에도 불구하고 시공관리업무의 효율성을 위해 시설사업기획과장으로부터 시공관리 요청을 받은 때에 검사관을 임명할 수 있다.

③소관부서장은 단순공사인 경우에는 주공종 검사관으로 하여금 부대공종의 검사업무를 수행하게 할 수 있다.

④소관부서장이 임명하는 검사관은 4급 또는 5급 직원을 원칙으로 하되 임명이 곤란할 경우에는 6급 직원을 임명할 수 있다.

제39조(검사관의 임무) 검사관은 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 기성부분 및 준공된 공사의 계약서, 설계서 등에 의한 계약내용 이행 확인

2. 사용자재 등 각종시험 성적 확인

3. 매몰부분에 대한 사진, 시공보고서등 관계 증빙자료 확인

4. 기타 공사계약 내용의 이행 확인

제40조(준공검사) ①소관부서장은 준공검사 요청을 받으면 제38조에 따라 임명된 검사관으로 하여금 계약서, 설계서, 기타 관계서류에 의하여 제39조의 임무를 수행하도록 하여야 한다.

②소관부서장은 검사결과 계약내용에 적합하지 아니하거나 부당함이 발견되었을 경우에는 그 내용 및 조치의견을 수요기관 및 계약상대자에게 통지하고 이를 시정하게 한후 재검사를 요청하도록 하여야 한다. 이 경우 경미한 사항에 대하여는 공사현장에서 계약상대자에게 시정하도록 직접 통지할 수 있다.

③소관부서장은 검사결과 계약내용에 적합하다고 인정되는 경우에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 수요기관에 맞춤형서비스 관리업무가 종결되었음을 통지한다.

1. 준공검사 조서(별지 제7호 서식)

2. 감독조서(별지 제8호 서식)

3. 준공 내역서(별지 제10호 서식)

4. 준공 도면

5. 준공 사진첩

④소관부서장은 준공 후 다음 각 호의 시설물 및 현장문서 인계․인수에 대한 일정을 수요기관과 협의하여 인계․인수하여야 한다.

1. 시설물 및 운영지침서 인계․인수

2. 감리 현장문서 인계․인수

제41조(기성부분 검사) ①공사의 기성부분 검사는 제40조제1항 및 제2항의 규정을 준용한다.

②기성대가 지급시의 기성검사는 소관부서장이 임명한 감독관이 작성한 감독조서의 확인으로 갈음할 수 있다. 다만 동 검사 3회마다 1회는 제40조제1항에 의한 검사를 실시하여야 한다.

③소관부서장은 제1항 및 제2항에 따라 기성부분 검사를 하였을 때에는 다음 각 호의 서류를 첨부하여 수요기관에 통지한다.

1. 기성검사 조서(별지 제9호 서식) 다만, 제2항에 의한 검사의 경우에는 제외한다.

2. 감독조서(별지 제8호 서식)

3. 기성부분 내역서(별지 제11호 서식)

제 3 절  설계변경 등

제42조(설계변경) ①설계변경은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다.

1. 설계서의 내용이 불분명하거나 누락․오류 또는 상호 모순되는 점이 있는 경우

2. 지질, 용수 등 공사현장의 상태가 설계서와 다른 경우

3. 새로운 기술․공법사용으로 공사비의 절감 및 시공기간의 단축 등의 효과가 현저한 경우

4. 기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정하는 경우

②감독관 또는 공사관리관은 계약상대자 또는 수요기관으로부터 제1항과 관련하여 설계변경 검토 요청을 받은 경우에는 건설사업관리기술자로 하여금 설계변경의 타당성, 공사비 증감액, 공사기간 등을 검토․보고하게 하고 그 내용을 검토한 후 수요기관에 통지한다.

③소관부서장은 제2항에 따른 통지내용에 대하여 수요기관의 동의가 있을 경우는 변경설계 도서에 의한 설계변경(안)을 작성, 수요기관에 송부하여 계약내용 변경 등 필요한 조치를 하도록 하여야 한다. 다만, 일괄대행 관리공사인 경우에는 소관부서장이 이를 대행할 수 있다.

④소관부서장은 감독관 또는 공사관리관으로 하여금 제3항에 따라 설계변경(안)이 확정된 경우에는 설계변경 내용 및 공사비 증감액 등을 내부정보화시스템(EDI)에 입력토록 하여야 한다.

제43조(설계변경도서 작성) 소관부서장은 제42조제3항에 따라 변경한 설계도서를 감독관 또는 공사관리관 및 건설사업관리기술자가 작성하기 곤란하여 설계자 또는 계약상대자로 하여금 변경 설계도서를 작성하게 하는 경우에는 수요기관과 협의하여 실비를 초과하지 아니하는 범위 안에서 소요된 비용을 지급하여야 한다.

제44조(기타 계약 변경) 소관부서장은 계약상대자 또는 수요기관으로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정, 기타 계약내용 변경에 관한 검토 요청이 있을 경우에는 이를 건설사업관리기술자로 하여금 검토·보고하게 하여 그 내용을 검토한 후, 수요기관에 통지하여 계약내용 변경등 필요한 조치를 하도록 한다. 다만, 일괄대행 관리공사의 경우에는 소관부서장이 이를 대행할 수 있다.

제 4 절  관급자재 관리

제45조(관급자재 사용계획 검토)①감독관 또는 공사관리관은 건설사업관리기술자로 하여금 계약상대자로부터 관급자재 사용계획서를 제출받아 공사예정공정표에 의거 관급자재 소요량을 검토․보고하게 하여야 한다.

②감독관 또는 공사관리관은 제1항의 관급자재 사용계획서를 확인한 후 수요기관에 송부하여 관급자재 공급을 요청하여야 한다.

제46조(관급자재 구매 등) 관급자재는 수요기관에서 구매하도록 하여야 한다. 다만, 수요기관에서 관급자재 구매 대행을 요청할 경우에는 소관부서장이 필요하다고 판단할 경우에 한하여 협조할 수 있다.

제47조(관급자재 인수) 감독관 또는 공사관리관은 수요기관 물품출납공무원이 관급자재에 대한 검사, 검수 절차를 완료하여 계약상대자에게 인계할 때에는 건설사업관리자로 하여금 당해 자재가 설계서 및 현장여건에 적합한지를 입회하여 확인하게 하여야 한다.

제48조(관급자재 보관관리) 감독관 또는 공사관리관은 건설사업관리자로 하여금 제47조에 따라 관급자재가 공사현장에 반입되는 경우에는 관급자재 수불대장(별지 제12호 서식)에 기록하고 계약상대자가 도난, 멸실의 방지 및 품질유지를 위한 필요한 조치를 하도록 하여야 한다.

제49조(공사관리자문) 소관부서장은 공사관리자문이 필요한 경우에는 제7 장 “공사관리자문위원회 운영” 규정에 의하여 공사관리자문을 의뢰할 수 있다.

제50조 삭제<2014.11.24.>

제51조 삭제<2014.11.24.>

제 5 장  감독관 및 공사관리관의 복무

제52조(기본임무) ①공사관리 업무를 수행하는 감독관 또는 공사관리관은 다른 법령에 규정되어 있거나 별도로 정한 경우를 제외하고는 이 규정에 의거 업무를 수행하여야 한다.

②감독관 또는 공사관리관은 수요기관과의 약정사항 및 공사의 특수성을 사전에 파악하여 공사관리 업무를 수행하여야 한다.

③감독관 또는 공사관리관은 당해공사 및 건설사업관리용역 관리에 필요한 설계서(공사시방서, 설계도면, 현장설명서, 공종별 목적물 물량내역서), 건설사업관리 용역과업내용서 등 관계서류를 사전에 숙지하고 관계법령을 검토하여 객관적이고 합리적으로 공사 관리업무를 수행하여야 한다.

제52조의2(감독관 또는 공사관리관의 현장배치) 소관부서장은 건설사업관리를 위탁한 경우에는 감독관 또는 공사관리관을 현장에 비상주 근무하도록 하여야 한다. 다만, 공사의 중요도, 현장 여건상 상주함이 공사 추진 상 효율적이라 인정되는 경우에는 현장 상주 근무를 하게 할 수 있다.

제53조(유의사항) 감독관 또는 공사관리관은 업무 수행 중 다음 각 호의 사항에 유의하여야 한다.

1. 공사현장에서 활동하기에 적합한 복장을 착용하여야 한다.

2. 개인감정 및 청탁 등을 일체 배제하고 공명정대하게 공사를 관리하여야 한다.

3. 공무 외에는 차량, 전화 및 사무용품 등을 일체 사용하여서는 아니된다.

4. 숙박업소, 음식점 및 교통수단의 이용시에는 공무원의 품위에 맞도록 하여야 한다.

5. 공사관리와 관련하여 금품, 향응, 숙식 및 교통 편의 제공 등을 받아서는 아니된다.

6. 업무와 관련하여 알게 된 사항에 대하여 외부에 누설하여서는 아니된다.

제54조(서류의 정리 및 비치) 감독관 또는 공사관리관은 공사를 관리하기 위하여 다음 각 호의 서류를 작성 또는 정리 비치하여야 한다.

1. 서류

가. 근무상황부

나. 업무지시부

다. 기 타

2. 도표

가. 공정표

나. 현장 조직표

다. 비상연락망

라. 기 타

제55조(업무대행자 지정 등) 감독관 또는 공사관리관이 기타 사유로 인하여 장기간 공사현장 관리가 곤란한 경우 소관부서장은 이 기간동안 업무대행자를 지정하여야 한다.

제56조(현장대리인등의 교체) ①감독관 또는 공사관리관은 현장대리인 또는 그의 소속기술자등이 당해공사의 품질 확보를 위하여 부적당하다고 인정되는 경우에는 계약상대자에게 이들의 교체를 요구할 수 있다. 다만, 현장대리인의 경우에는 사전에 소관부서장에게 그 사유를 보고 하여야 한다.

②감독관 또는 공사관리관은 현장대리인이 부득이한 사유로 현장을 이탈하여야 할 경우에는 그 기간을 지정하고 이를 허락할 수 있다.

제57조(지시사항 처리) 감독관 또는 공사관리관은 소관부서장으로부터 공사시공에 관하여 지시를 받았을 경우에는 이를 성실히 수행하고 그 시행결과를 보고하여야 하며 당해지시에 대한 이행에 문제가 있을 경우에는 의견을 제시할 수 있다.

제58조(시공계획 검토) ①감독관은 건설사업관리기술자로 하여금 전체 공종계획에 따라 명일, 주간, 월간 작업계획 및 노무자 동원계획 등을 현장대리인으로부터 제출받아 적정여부를 검토하게 하여야 하며, 공사 진행상 문제가 있다고 판단될 경우에는 그 대책을 강구하여야 한다.

②감독관은 공사시공에 필요한 경우에는 건설사업관리기술자로 하여금 시공상세도 등을 제출하게 하여 이의 적정여부를 검토하여야 한다.

③감독관 또는 공사관리관은 공사 진행상 문제가 있다고 판단될 경우에는 전체 공종계획 등을 점검하고 조치하여야 한다.

제59조(공정관리)①감독관 또는 공사관리관은 공정계획에 따라 공사를 추진토록 하여야 하며 공사진행이 공정계획과 차질이 있다고 판단될 경우에는 현장대리인으로부터 그 원인과 공정만회 대책을 제출받아 검토하여야 한다.

제60조(시공확인 등) ①감독관은 설계서를 검토하고 건설사업관리기술자로 하여금 설계서에 적합한 자재 사용 및 시공의 일치여부를 확인하게 하여 적정하지 않다고 인정되는 경우에는 서면으로 재시공지시 등 필요한 조치를 하여야 한다.

②감독관은 계약상대자가 제1항에 따르지 아니하거나 공사에 중대한 결함이 발생할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 공사중단 등의 조치를 하고 이를 소관부서장에게 보고한 후 필요한 경우에는 수요기관에 통보한다.

제61조(매몰부분등) 감독관은 건설사업관리기술자로 하여금 매몰되거나 사후검사가 곤란한 부분은 시공상태를 증빙할 수 있는 사진과 상세한 기록을 비치하도록 하여야 한다.

제62조(품질관리 등) ①감독관은 시설공사의 품질확보를 위하여 계약상대자가 공사계약문서에서 정한 바에 따라 작성한 품질관리(또는 시험) 계획서를 건설사업관리기술자로 하여금 검토․확인하게 하고, 그 내용을 검토한 후 승인하여야 한다.

②감독관은 제1항의 품질관리(또는 시험) 계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 확인하여야 한다.

③감독관은 계약상대자가 실시하는 관리시험을 공업표준화법의 규정에 의한 한국공업규격 및 국토교통부령이 정하는 품질시험 기준에 따라 실시하도록 하여야 한다.

④감독관은 제2항에 따라 시험실시를 위한 시험실, 시험장비의 확보 및 시험을 실시할 수 있는 능력을 보유한 시험요원의 배치 등을 수시 확인하여야 한다.

⑤감독관은 건설사업관리기술자로 하여금 계약상대자가 실시한 시험의 적정여부를 확인하기 위하여 국,공립시험기관에 의뢰하여 검사시험을 실시하도록 할 수 있다. 이 경우 계약상대자의 현장대리인 또는 그의 대리자의 참여하에 시료를 채취하여야 한다.

⑥감독관은 건설사업관리기술자로 하여금 관리시험 및 검사시험의 결과를 기록 유지하도록 하여야 하며 품질시험 성과내용을 검토하여야 한다.

제63조(안전관리 및 사고처리) ①감독관은 시설공사의 안전시공을 위해 계약상대자가「건설기술진행법 시행령」 제98조와 제99조에 따라 작성한 안전관리계획서를 건설사업관리기술자로 하여금 검토․확인하게 하고, 그 내용을 검토한 후 승인하여야 한다.

②감독관은 제1항의 안전관리계획서와 「산업안전보건법」의 해당규정에 따른 조직편성, 산업재해 예방을 위한 제반 안전관리, 안전점검, 안전교육 등의 이행을 지도 감독하여야 한다.

③감독관 또는 공사관리관은 현장에서 다음 각 호의 사고가 발생하였을 경우에는 계약상대자에게 즉시 필요한 응급조치를 취하도록 하고 상세한 경위 및 검토의견서를 소관부서장에게 지체 없이 보고하여야 하며, 필요시 수요기관에게 이 사실을 통보하여야 한다.

1. 천재지변 기타의 사유로 공사현장에 피해가 발생하였을 때 또는 장기간 시공이 불가능할 때

2. 사망자 또는 2명이상의 부상자가 발생하는 등 재해의 정도가 심한 중대한 재해

3. 시설물이 붕괴되거나 전도되어 재시공이 필요한 사고

4. 기타 사고의 원인규명을 위해 사고조사가 필요하다고 인정하는 사고

제64조(계약상대자의 제출서류 처리)감독관은 건설사업관리기술자로 하여금 계약상대자가 제출하는 다음 각호의 문서를 지체없이 검토․보고하게 하고, 그 내용을 검토한 후 소관부서장에게 보고하여야 한다.

1. 공사기성부분 검사원

2. 준공검사원

3. 관급자재대체사용 신청

4. 준공기한연기원

5. 하도급통지 또는 하도급승인신청

6. 기타 시공상 필요한 보고 또는 신청

제65조 삭제<2014.11.24.>

제66조 삭제<2014.11.24.>

제67조(공사현장 정리) 감독관 또는 공사관리관은 준공처리 전에 계약상대자로 하여금 가설물철거, 잔여자재 반출, 토치장 등 공사현장을 정리토록 하여야 한다.

제68조 삭제<2014.11.24.>

제69조(시설물 및 현장문서 인계․인수) ①감독관 또는 공사관리관은 당해 공사가 준공되면 건설사업관리기술자 또는 계약상대자로 하여금 다음 각 호의 시설물 및 현장문서 인계․인수를 위한 계획을 수립하도록 하여야 한다.

1. 일반사항(공사개요 등)

2. 운영지침서(필요한 경우)

가. 시설물의 규격 및 기능점검 항목

나. 기능점검 절차

다. TEST 장비확보 및 보정

라. 기자재 운전지침서

마. 제작도면 절차서 등 관련도면

3. 시운전 결과보고서(시운전 실적이 있는 경우)

4. 예비준공검사 결과

5. 특기사항 등

6. 현장문서

가. 감리기록서류

나. 준공사진첩

다. 준공도면

라. 품질시험 및 검사 성과 총괄표

마. 기자재 구매서류

바. 시설물 인계․인수서

사. 기타 필요하다고 인정하는 서류

②감독관 또는 공사관리관은 제1항에 따라 수요기관에 시설물 및 현장문서를 인계․인수하도록 하여야 한다.

제 6 장   공사의 평가 등

제70조(평가의 종류 등) ①평가는 「건설기술진흥법」제50조에 따른 용역평가와 시공평가, 동 법 제53조에 따른 부실측정, 동 법 제52조에 따른 사후평가로 구분한다.

②소관부서장은 건설업자의 기술 수준 향상과 건설공사 품질확보를 위하여 용역평가 및 시공평가를 실시하고 그 결과에 따라 우수업자 및 우수감리원을 지정할 수 있다.

③소관부서장은 설계, 건설사업관리 또는 건설공사를 성실하게 수행하지 아니함으로써 부실공사가 발생하거나 발생할 우려가 있다고 판단하는 경우 또는 타당성을 조사할 때 수요예측을 고의 또는 중대한 과실로 부실하게 하여 손해를 끼친 경우에는 부실의 정도를 측정하여 계약상대자에 부실벌점을 주어야 한다.

④시설사업기획과장 및 소관부서장은 총공사비가 500억원 이상인 건설공사가 완료되었을 때에는 약정 범위에 따라 공사내용 및 그 효과를 조사·분석할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 수요기관에 통보할 수 있다.

1. 실제 투입된 설계비 및 설계기간

2. 기본설계 완료 후 추정 공사비 및 실시설계 완료 후 추정 공사비

3. 공사의 도급방법, 계약성질, 입찰방식, 계약방식

4. 실제 투입된 공사비 및 공사기간

5. 설계변경 내역. 다만, 물가변동에 따른 설계변경은 제외한다.

제71조(평가의 대상) ①제70조의 평가 등은 제9조제1항 또는 제2항 제4호에 따른 맞춤형서비스 관리 업무를 수행하는 공사 또는 조달사업특별회계 공사에 적용한다.

②용역평가는 계약금액이 1억 5천만원 이상인 기본설계 또는 실시설계 용역과 감독 권한대행 등 건설사업관리 용역에 대하여 실시한다.

③시공평가는 총공사비 100억원 이상인 공사에 대하여 실시한다. 다만, 총공사비는 토목, 조경, 건축, 기계 등을 합한 금액을 말한다.

④건설사업관리용역 평가는「건설기술진흥법 시행령」제55조제1항의 규정에 해당하는 감독 권한대행 등 건설사업관리에 대하여 실시한다. 다만, 건설사업관리용역업자의 기술수준 향상과 공사의 품질확보를 위해 총공사비 100억원 이상인 공사에 대하여 평가를 실시할 수 있다.

⑤부실측정은 다음 각 호에 대하여 실시할 수 있다.

1. 총용역비가 1억5천만원 이상인 설계 등 용역(건축사법에 의한 건축설계 용역을 포함한다)

2. 총용역비가 1억5천만원 이상인 건설공사의 건설사업관리용역

3. 기타 시설사업기획과장 또는 소관부서장이 필요하다고 인정하는 기술용역 또는 건설공사

제72조(평가자) ①시설사업기획과장 및 소관부서장은 제70조제2항의 용역 및 시공평가를 할 때에는 5인 이상의 관계공무원(감독관 또는 공사관리관, 설계 관리원) 및 다음 각 호에 해당하는 자에게 평가를 의뢰할 수 있다.

1. 제7장에 의한 공사관리자문위원 중에서 해당분야 전문가

2.「조달청 기술자문위원회 설치 및 운영규정」에 따른 기술자문위원

3. 용역평가의 경우 공사에 참여한 건설사업관리기술자 및 계약상대자(시공자)

4. 시공평가의 경우 건설사업관리기술자 및 설계자

②소관부서장은 제1항에 불구하고 감리 용역평가 및 시공평가의 평가자 구성을 다음 각 호와 같이 할 수 있다.

1. 공사관리자문위원 3인, 조달청 직원 1인, 수요기관 1인으로 구성. 다만, 수요기관 평가자는 수요기관에서 요청하는 경우 조달청 직원으로 대체할 수 있다.

2. 공사의 특수성이 있거나 수요기관의 요청이 있어 필요한 경우 별도의 평가자로 구성

3. 제1호에 따라 평가가로 참석하는 조달청 직원은 평가대상 주공종의 기술분야 5급이상 공무원 또는 공무원 근무경력 10년 이상인 자를 원칙으로 한다. 다만, 평가인력 부족으로 부득이한 경우에는 소관부서장이 판단하여 적합한 자를 선정할 수 있다.

③시설사업기획과장은 제70조제3항의 부실측정을 할 때에는 직접 지정한 검사관 및 감독관, 건축분야 설계 관리원으로 하여금 부실을 측정하도록 하여야 한다. 다만, 부실측정 기준이 시공단계를 포괄하는 경우에는 소관부서장이 지정한 감독관 또는 공사관리관이 부실을 측정하고 그 결과를 통보토록 하여야 한다.

제72조의 2(평가주관부서) 평가의 주관부서는 다음 각 호와 같다.

1. 설계용역에 대한 평가 및 부실측정은 시설사업기획과장이 주관한다.

2. 건설사업관리용역에 대한 용역평가 및 공사의 시공평가는 소관부서장이 주관한다.

제73조(평가기준) ①기본설계 또는 실시설계 용역평가는 다음 각 호의 평가항목을 고려하여 설계용역 평가표(별지 20호 서식)에 따라야 한다.

1. 사전조사

2. 구조계산

3. 물량내역

4. 도서작성

5. 기 타

②건설사업관리 용역평가는 「감독 권한대행 등 건설사업관리용역평가 시행지침(국토교통부 고시)」제5조에서 규정한 “세부평가기준”에 따라 실시한다.

③시공평가는「건설공사 시공평가 시행지침(국토교통부 고시)」제9조제1항에서 규정한 “시공평가표” 및 “시공평가 세부기준 및 방법”에 따라 실시한다.

④부실측정은「건설기술진흥법시행령」별표 제8호의 ‘건설공사 등의 벌점관리기준’을 따르며 검사관, 감독관 또는 공사관리관, 설계 관리원은 시설사업기획과장이 정한 “부실측정 가이드라인”에 따라 부실벌점 책정여부를 판단할 수 있다.

제74조(평가의 시기) ①시공평가는 당해 공사가 90%이상 진척된 때에 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 필요하다고 인정하는 경우에는 중간평가를 실시할 수 있고 그 결과를 시공평가결과에 50%의 범위 내에서 반영할 수 있다.

②용역 및 시공평가의 다음 각 호에 따라 정한 기간 내에 실시하여야 한다.

1. 설계용역 : 기본설계는 실시설계가 준공된 연도의 다음 연도, 실시설계는 당해 건설공사가 준공된 연도의 다음 연도

2. 건설사업관리용역평가 : 당해 감리용역이 준공된 연도의 다음연도 2월말

3. 시공평가 : 당해 공사가 준공된 연도의 다음 연도 2월말

③부실측정은 당해 공사가 준공된 연도의 다음 연도까지 실시한다.

제75조(평가결과의 조치 등) ①소관부서장은 용역 평가 완료 후 평가자가 제출한 용역평가 의견서(별지 제20호 서식)에 따라 설계보완 조치 등을 지시하여야 한다.

②소관부서장은 평가자로 하여금 시공평가 의견서(별지 제17호 서식)를 작성하여 제출토록 하고 평가결과를 수요기관 및 계약상대자에 통보하여 준공검사 전까지 필요한 조치를 취하도록 하여야 한다.

③시설사업기획과장은 평가자가 책정한 부실벌점을 수요기관 및 평가 대상자에 통보하고 필요한 경우 평가 대상자에 부실벌점을 부과하여야 한다. 다만, 측정 결과 부실벌점 책정이 없는 경우에는 통보하지 아니할 수 있다.

④시설사업기획과장 또는 소관부서장은 제70조 각 항의 평가가 완료된 때에는 그 결과에 따라 수요기관 및 계약상대자에 결과를 통보하고 계약상대자에 보완 지시, 「건설기술진흥법」제53조에 따른 부실벌점 부과, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제76조에 따른 부정당업자 재제 등 관련 법규에 따라 조치하여야 한다.

⑤시설사업기획과장 및 소관부서장은 제70조 각 항의 평가 및 부실측정 결과를 기록하여 보관하여야 한다.

⑥시설사업기획과장 및 소관부서장은「건설기술진흥법 시행규칙」제44조에 따른 시공능력 및 용역능력평가 결과를 관련 규정에 따라 입찰참가사전심사(PQ) 및 적격심사 등에 반영토록 요청할 수 있으며 우수업체는 개청기념일에 표창토록 요청할 수 있다.

제75조의 2(부실벌점 산정 및 우수업자 지정 방법) ①시설사업기획과장은「건설기술진흥법 시행령」별표 제8호의 ‘건설공사 등의 벌점관리기준’ 및  운영요령에 따라 부실벌점을 산정 및 부과하여야 한다.

②시설사업기획과장 또는 소관부서장은 제70조제2항의 용역평가 및 시공평가 결과에 따라「건설기술진흥법」제51조제1항의 우수건설기술용역업자 및 우수건설기술자을 지정할 수 있다. 다만, 우수건설기술용역업자 및 우수건설기술자 지정에 관한 세부규정은 동 법 시행령 및 시행규칙, 운영요령 등을 따른다.

제75조의 3(평가대상자의 의견에 대한 조치 등) ①시설사업기획과장은 부실벌점의 부과대상자에게 부실벌점 책정결과에 대한 의견제출 기회를 부여해야 하며 부과대상자는 통보받은 날로부터 30일 이내에 의견서를 제출할 수 있다.

②시설사업기획과장은 부실벌점 부과대상자의 의견서를 접수받은 날로부터 15일 이내에 의견을 제출한 자에게 제출의견에 대한 검토결과를 통보해야 한다.

③제2항의 검토는 시설사업기획과장이 지명한 5인 이상의 관계 공무원으로 해당 용역 또는 공사와 무관한 자를 지명하는 것을 원칙으로 하되 필요하다고 인정하는 경우 기술자문위원 중 유관분야 전문가를 지명하거나 수요기관, 소관부서 등에 추천을 의뢰할 수 있다.

④시설사업기획과장은 제2항에 따라 검토한 결과 부실벌점의 책정에 명백한 하자가 있는 경우 부실벌점의 책정결과를 정정하여 수요기관 및 평가 대상자에 통보해야 한다.

제76조(평가비) 외부 평가자에 대한 평가비는 엔지니어링 대가의 기준(한국엔지니어링 진흥협회 공고)에 의거 지급할 수 있다.

제 7 장  공사관리자문위원회 운영

제77조(위촉방법) ①공사관리과(팀)장은 공사관리자문위원을 위촉하되 정기 및 수시로 구분하여 위촉한다.

②정기위촉은 위촉대상 분야의 전문가를 위촉일로부터 2년간 일괄하여 위촉한다.

③수시위촉은 관련분야의 전문가를 수시로 위촉한다.

④수요기관과 체결한 약정서에 특별히 정한 경우에는 그에 따른다.

제78조(위촉대상 분야) ①자문위원 위촉 대상분야는 다음 각 호와 같다.

1. 건축：구조, 시공, 계획

2. 토목：토질, 기초, 구조, 상하수도, 시공, 조경

3. 기계：공기조화설비, 냉난방설비 및 소방설비

4. 전기：변전,전력간선 및 조명설비

5. 정보통신：통신 ,IT 및 방송(영상)설비

6. 기타 공사관리자문이 필요한 분야

②공사관리업무 수행 지역이 광역인 경우에는 지역적으로 구분 위촉할 수 있다.

제79조(자문자격) 공사관리자문위원의 자격은 다음 각 호와 같다.

1. 당해분야 석․박사 학위 소지자, 기술자격 및 면허 소지자

2. 해당분야의 저명인사

제80조(자문범위) 시설공사 계약사무 및 공사관리 업무를 수행함에 있어 다음 각 호의 경우에 자문을 득할 수 있다.

1. 중요 부분의 설계도서 내용에 대한 적정성 여부

2. 중요 부분 설계 변경시 그 변경에 관한 사항

3. 시공중 발생하는 문제점 또는 안전 확인 등이 필요한 경우

4. 기타 자문이 필요한 경우

제81조(자문비) 자문비는 엔지니어링 대가의 기준(한국엔지니어링 진흥협회 공고)에 의거 지급할 수 있다.

제 8 장 사후관리

제82조(사후관리) ①「국가계약법 시행령」제61조에 따른 하자점검은 수요기관에서 실시하며, 소관부서장은 조달청장이 공사관리하여 준공한 시설물에 대하여 수요기관이 하자검사를 원활히 할 수 있도록 지원하기 위하여 준공 후 2년간 시공사와 건설사업관리용역업자 등이 참석하는 다음 각 호의 사후점검 회의을 소집할 수 있다.

1. 정기 사후점검

가. 준공 후 6개월 이내(1회차 점검)

나. 준공 후 1년 이내(2회차 점검)

다. 준공 후 2년 이내(3회차 점검)

2. 수시 사후점검

가. 수요기관에서 하자점검을 요청한 경우로서 하자 발생의 정도가 중대하다고 판단되는 경우

②소관부서장은 제1항에 따른 하자점검 실시 결과 나타난 하자사항은 계약상대자로 하여금 당해 하자발생원인 및 기타 조치사항, 하자보수계획서 등을 제출하게 하고 하자를 보수한 후에는 수요기관에서 하자보수완료 확인서를 받아 제출하도록 하여야 한다.

③소관부서장은 국가계약법령에서 규정한 하자검사를 수요기관이 실시할 때 수요기관의 협조 요청이 있는 경우에는 이를 지원할 수 있다.

제83조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2018년 7월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부   칙<‘96.11.15>

①이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

②이 규정시행일 이전에 계약체결되어 준공기간이 미도래된 모든 공사에 대하여도 이를 적용한다.

③공사관리업무처리규정(조달청훈령 제779호), 공사감독관복무규정(조달청훈령 제670호), 공사평가운용규정(조달청훈령 제777호), 기술고문운영규정(조달청훈령 제704호)은 폐지한다.

④종전 기술고문운영규정에 의하여 위촉된 기술고문은 이 규정에 의한 기술고문으로 본다.

부   칙<‘98. 4.27>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부   칙<‘99. 11.9>

이 규정은 발령일로부터 시행한다.

부   칙<‘06. 12.12>

이 규정은 발령일로부터 시행한다.

부    칙<‘09. 8.21>

이 훈령은 2009년 8월 24일부터 시행한다.

부    칙<‘11. 11. 28>

①이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

②이 훈령 시행일 이전에 계약 체결되어 준공하지 않은 용역 또는 공사에 대하여도 이를 적용한다.

부    칙<‘14. 11. 24. >

①이 훈령은 2014년 11월 29일부터 시행한다.

②이 훈령 시행일 이전에 계약 체결되어 준공하지 않은 용역 또는 공사에 대하여도 이를 적용한다.

③조달청 시설공사 관리업무 처리규정(조달청훈령 제1529호)은 폐지한다.

부    칙<‘15. 6. 1. >

①이 훈령은 2015년 6월 1일부터 시행한다.

②이 훈령 시행일 이전에 계약 체결되어 준공하지 않은 용역 또는 공사에 대하여도 이를 적용한다.

부    칙<‘18. 5. 16. >

①이 훈령은 2018년 5월 25일부터 시행한다.

②이 훈령 시행일 이전에 계약 체결되어 준공하지 않은 용역 또는 공사에 대하여도 이를 적용한다.

[별지 제1호 서식]

시 설 공 사 관 리 대 장

번호	접수 일자	업무구분 (설계,감리용역,부분대행,일괄대행	공사 (용역) 명	공사(용역) 금 액 (예산액)	수요 기관	공사 현장	담당자	비고

[별지 제2호 서식]

시 설 공 사 부 분 대 행 관 리 약 정 서
약 정 번 호	제 - 호	수 요 기 관
공 사 명
공 사 현 장
공 사 규 모
공 사 금 액(예산기준)
시 설 공 사 관리 수수료
관 리 기 간	약정 체결 후 관리기간 완료시 까지

조달사업에 관한 법률 제3조 및 동시행령 제9조의3 제4항에 의하여

상기 시설공사에 대한 부분대행관리업무를 조달청장이 대행함에 있어 상호간에

수행할 업무한계를 별첨과 같이 할 것을 조건으로 하여 약정함.

201 년 월 일 (인) (이하 “갑”이라함.)	201 년 월 일 조 달 청 장 (인) (이하 “을”이라함.)

※특기사항 : 전자문서 유통이 가능한 기관은 상호 관인을 생략한다

붙임 : 시설공사 부분대행관리 약정일반조건 1부 .  끝

[별지 제3호 서식]

시 설 공 사 일 괄 대 행 관 리 약 정 서
약 정 번 호	제 - 호	수 요 기 관
공 사 명
공 사 현 장
공 사 규 모
공 사 비 (예 산 액)
시 설 공 사 관 리 수 수 료
관 리 기 간	약정 체결 후 공사 완료시 까지

조달사업에 관한 법률 제3조 및 동시행령 제9조의3 제4항에 의하여

상기 시설공사에 대한 일괄대행관리업무를 조달청장이 대행함에 있어 상호간에

수행할 업무한계를 별첨과 같이 할 것을 조건으로 하여 약정함.

201 년 월 일 (인) (이하 “갑”이라함.)	201 년 월 일 조 달 청 장 (인) (이하 “을”이라함.)

※특기사항 : 전자문서 유통이 가능한 기관은 상호 관인을 생략한다

붙임 : 시설공사 일괄대행관리 약정일반조건 1부 .  끝

[별지 제4호 서식]

설 계(기술,감리)용역 검 사 조 서

1. 용 역 명：

2. 계 약 자：

3. 계약금액：

4. 계 약 일：

5. 착 수 일：

6. 납품기한：

7. 납 품 일：

8. 검 사 일：

상기 설계(기술,감리)용역에 대하여 과업내용서 및 기타 계약내용에 따라 검사한 결과

계약내용대로 완료되었음.

201  .    .    .

〔검    사    관〕

건축                  (인)

토목                  (인)

기계                  (인)

전기                  (인)

[별지 제5호 서식]

설 계(기술,감리)용역 감 독 조 서

1. 용 역 명：

2. 계 약 자：

3. 계약금액：

4. 계 약 일：

5. 착 수 일：

6. 납품기한：

7. 납 품 일：

8. 검 사 일：

상기 설계(기술,감리)용역에 대하여 과업내용서 및 기타 계약내용에 따라 감독한 결과

계약내용대로 완료되었음.

201  .    .    .

〔감    독    관〕

건축                  (인)

토목                  (인)

기계                  (인)

[별지 제6호 서식]

주 간  업 무 보 고     보고자 :

■ 업무수행 실적

월/일/요일		근무지(공사명)	주요부분 진행현황	면담자 및 처리 내용			조치 및 특기사항
		공정율(계획/실제)		소속	성명	내용

■ 업무수행 계획

월/일/요일		근무지(공사명)	업무처리 계획	특기사항

■ 지난주 청렴이행결과 보고

청렴이행 내용	예	아니오
￭직무관련 교통편의, 금품, 향응제공을 받은 일이 없었는가
￭직무관련 부당․대가성 청탁을 받은 일이 없었는가
￭공사현장에 비정상 출퇴근, 무단결석․이석 등이 없었는가
￭특정 하도급지정․자재사용 등의 공사이권 개입은 없었는가
￭공사업무 관련자에게 위법, 부당한 행동을 한일은 없는가
￭공사관련 업무처리는 정한 기일내에 신속하게 하였는가
￭공사관련 업무처리는 투명하고 공정하게 하였는가
￭공사감독관 윤리강령, 현장근무수칙 등을 준수하고 있는가

[별지 제7호 서식]

준 공 검 사 조 서

1. 공 사 명：

2. 계 약 자：

3. 계약금액：

4. 준공금액：

5. 계약일자：

6. 착 공 일：

7. 준공기한：

8. 준 공 일：

9. 검 사 일：

상기 공사에 대하여 준공검사를 실시한 결과 계약내용대로 준공되었음.

붙 임 : 준공내역서 1부.

201  .     .     .

(검 사 관)

소  속

직성명                 (인)

[별지 제8호 서식]

감   독   조   서

준 공

제(  )회 기성

1. 공 사 명：

2. 계 약 자：

3. 계약금액：

4. 준공기한：

5. 준 공 일：

상기 공사에 대하여 설계도면 및 기타 계약내용에 따라 201  .  .  . 부터 201.

까지 공사 감독한 결과 201  .    .    . 현재 전 공정의   %가 완료되었음.

200   .     .     .

(감 독 관)

소  속

직성명                 (인)

[별지 제9호 서식]

기 성 검 사 조 서(제  회)

1. 공 사 명：

2. 계 약 자：

3. 계약금액：

4. 전회 기성금액：

5. 금회 기성금액：

6. 누계 기성금액：

7. 계약 년월일：

8. 착공 년월일：

9. 준 공 기 한：

10. 검 사 일 자：

상기 공사의 기성부분에 대하여 붙임과 같이 기성검사 하였음.

붙 임 : 기성내역서 1부.

201  .    .    .

(검 사 관)

소  속

직성명                 (인)

[별지 제10호 서식]

준 공 내 역 서

1. 공 사 명：

2. 계약금액：

3. 준공금액：

4. 증 감 액：

명 칭	규 격	단 위	당 초 내 역			변 경 내 역			증감액	비 고
			수 량	단 가	금 액	수 량	단 가	금액

[별지 제11호 서식]

기 성 부 분 내 역 서

1. 공 사 명：

2. 계약금액：

3. 기성금액：

4. 공    정：        금 회        %,     누 계        %

구분 내역	계 약			기 성 부 분
				금 회			누 계
	수 량	단 가	금 액	비율(%)	수 량	금액	비율(%)	수 량	금 액

[별지 제12호 서식]

관 급 자 재 수 불 대 장

품  명：

월 일	시공부위	설계량	반입량	사용량	잔 량	현장대리인	감 독	비 고

[별지 제13호 서식]

품 질 시 험 관 리 대 장

구 분	월 일	시험구분	시험 항목	시 험 의뢰일	결 과 통보일	시험성과	시험기관	감독 또는 감리원 확인

[별지 제14호 서식]

공 사 관 리 수 수 료 산 출 내 역 서

1. 약정번호：

2. 공 사 명：

3. 수요기관：

4. 공사금액：

관리대상구분	공 사 예 산 액	합 계

5. 수수료：

공 종	적용금액(A)	수수료율(B)	수수료(A★B)

[별지 제15호 서식]

공 사 관 리 수 수 료 징 수 의 뢰 대 장

의뢰일자 (문서 번호)	약정 번호	공사명	관리 대상	공사금액 (예산액)	수요기관	감리수수료		고지		수납		잔액	비고
						요율	금액	일자	금액	일자	금액

[별지 제16호 서식]

설 계 평 가 의 견 서

분야

구 분	평 가 의 견
총 평
기 능 부 분 평 가
시 공 부 분 평 가
기 타 개 선 사 항 등

201   .   .   .

평가자：         (인)

[별지 제17호 서식]

시공 및 감리용역  평가 의견서

분야

구 분	평 가 의 견
총 평
평 가 내 용
문 제 점
기 타

201   .   .   .

평가자：       (인)

[별지 제18호 서식]

기 술 용 역 착 수 계 검 토 서

연번	착수계 서류	제출여부	검토내용	적정성	비고
1	사업자등록증
2	업무신고필증
3	사용인감계
4	인감증명서
5	착수계
6	설계용역 참여기술자 현황
7	설계용역수행조직표
8	사업책임기술자선임계
9	분야별 책임기술자 명단
10	분야별 책임기술자 선임계
11	분야별 책임기술자 업무내용
12	각 공종 분야별 책임기술자 명단
13	과업수행계획서
14	설계예정공정표
15	산출내역서
16	하도급예정현황
17	인력 및 장비 투입현황
18	보안각서
19	기타

※ 기타 : 용역과업내용에서 정한 사항을 추가

[별지 제19호 서식]

하도급 승인 검토서

○ 용역명 :                                           승인일자 : 201 .  .

분 야	상 호 (대표자)	계약 일자	착수 일자	완수 일자	등록 (신고) 번호	하도급금액 (원, VAT포함)	제출서류				승인 여부
							계약서	사업자 등록증	참여 기술자 명단	자격 면허증

※ ①하도급계약서, 하도급계약조건, ②사업자등록증 ③엔지니어링활동주체신고증(기술사사무소개설등록증) ④참여기술자명단 ⑤자격면허증 ⑥건설기술자경력증명서

[별지 제20호 서식]

설계용역 평가표
용역명				용역회사(대표자)
용역개요	착공	(용역기간)		과업 내용
	준공			용역금액
평가항목				평가 연월일
계	배점		세부 평가항목		평점	비고
1. 사전조사	15		ㆍ사전자료조사 적정 여부
			ㆍ토질, 기초조사, 시험 적정 여부
			ㆍ현장측량 적정 여부
2. 구조계산	10		ㆍ구조계산 적정 여부
			ㆍ구조계산결과 적용 적정 여부
			ㆍ구조물 설계위치 적정 여부
3. 명세산출	30		ㆍ수량산출 적정 여부
			ㆍ공사비산출(견적)내용 적정 여부
4. 도서작성	30		ㆍ설계서 작성 적정 여부
			ㆍ공사시방서 작성 적정 여부
			ㆍ설계도면 작성 적정 여부
			ㆍ기술자 서명날인 적정 여부
			ㆍ설계자문 결과 적용 여부
5. 기타	15		ㆍ각종 시정지시 이행 여부
			ㆍ친환경건설설계 반영 여부
			ㆍ신기술 적용 여부

※ 평가자는 각 평가 항목별로 평점을 작성한 주된 이유를 명시한 ‘평가 사유서’를 작성하여 평가표와 함께 제출함

201  .    .    .

평가자 :            (인)