협력기관 연구범위 및 펀딩규모 요약

과제명	수소설비 가스농도 측정기술 및 모니터링 시스템 개발

□ 협력기관별 연구범위

구분	방폭형 가스감지기 개발 및 개발품 국가공인기관 인증 획득 (참여)
협력기관 연구내용	- (제어모듈) 가스센서 제어모듈 PCB 및 운영 알고리즘 개발 - (제품개발) 수소설비용 수소/산소 농도측정용 가스감지기 시작품 설계/제작 및 설치 - (방폭평가) 방폭형 가스감지기 하우징 소재/구조설계/금형/제작 및 방폭 적합성 평가 - (방폭인증) 국가공인기관에 의한 국제/국내 방폭기준 가스감지기 인증 획득
기관유형	대기업, 중견기업, 중소기업 등
협력가능 기관명	가스센서 시작품 개발 및 방폭형 가스감지기 설계/제작 전문업체

□ 협력기관별 사업비 및 펀딩규모

[단위 : 백만원]

총사업비1)	700
기관유형	대기업, 중견기업, 중소기업 등
현금투자분	50
현물투자분	150

1) 총사업비 규모는 20% 내에서 변동가능

□ 협력기관별 연차별 개발 목표 및 개발 내용

(1) 1차년도

① 개발 목표

연구수행 기관	연구개발 목표
주관기관 (한국전력공사)	○ 가스센서 소재 및 소자 개발 - 이온성 액체 전해질 및 전극소재 개발
참여기관 (참여)	○ 가스센서 제어모듈 및 데이터 분석 알고리즘 설계/제작 - [전류-농도] 데이터 변환 회로 및 PCB 개발 - 가스감지기 하우징 방폭설계

② 개발 내용 및 범위

연구수행 기관	연구개발 내용 및 범위
주관기관 (한국전력공사)	○ 수소 및 산소가스 감지소재 개발 - 상온구동 방식 수소농도 센서, 산소농도 센서, 수소순도 센서 개발 - 온도/수분영향 평가, 데이터 보정 및 설계변경
참여기관 (참여)	○ 가스센서 제어모듈 및 데이터 분석 알고리즘 설계/제작 - 농도변환/분석용 가스센서 제어모듈 회로/PCB 제작 - 방폭형 가스감지기 하우징 소재 및 구조설계

(2) 2차년도

① 개발 목표

연구수행 기관	연구개발 목표
주관기관 (한국전력공사)	○ 가스농도 데이터 원격 모니터링 및 제어시스템 개발 - 가스농도 데이터 수집/저장/분석 및 경보시스템 개발
참여기관 (참여)	○ 방폭형 가스감지기 제작 및 성능평가 - 금형이용 가스감지기 하우징 제작 및 방폭 적합성 평가

② 개발 내용 및 범위

연구수행 기관	연구개발 내용 및 범위
주관기관 (한국전력공사)	□ 가스농도 원격 실시간 모니터링 및 제어 시스템 개발 - 가스농도/이벤트/통계/분석 및 제어기능 S/W 개발 - 설비 사양/운전 조건별 알람 및 운전정지 기능 부여
참여기관 (참여)	□ 가스감지기 적용 안전성 확보를 위한 방폭구조 설계/제작 - 수소설비 內 안전적용을 위한 가스감지기 하우징 방폭설계/제작

(3) 3차년도

① 개발 목표

연구수행 기관	연구개발 목표
주관기관 (한국전력공사)	○ 수소설비 전용 가스감지기/모니터링 시스템 현장실증
참여기관 (참여)	○ 방폭형 가스감지기 국제/국내 방폭인증 획득

② 개발 내용 및 범위

연구수행 기관	연구개발 내용 및 범위
주관기관 (한국전력공사)	∙ 가스감지기 실시간 모니터링 시스템 구축 및 현장실증 - 가스감지기 및 실시간 모니터링 시스템 현장 설치 - 사내 보유설비 실적용을 통한 가스센서 성능검증/보완
참여기관 (참여)	∙ 방폭형 가스감지기 국내외 적용을 위한 인증 획득 - 국가공인기관에 의한 가스감지기 방폭시험 및 인증 확보